※ 공고 시안

여수시도시관리공단 공고 제2023 - 038호

장애인국민체육센터 대정비 기간 연장 안내

장애인 전용 목욕탕 방수 및 타일 공사 관련으로 장애인국민체육센터 목욕탕 휴장 기간 연장을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 5월 3일

여수시도시관리공단 이사장

연 장 개 요

○ 연장사유

- 목욕조 내부 타일과 방수층 철거하는 중 기존 우레탄 방수층 철거 및 수분 건조에 시간이 소요(방수층 철거 1일, 수분 건조 2일 총 3일 소요)

- 타일 부착 후 양생 기간이 짧으면 부실시공이 될 수 있어서 공사기간 연장 필요

○ 연장기간 : (기존) 2023. 4. 29.(토) ~ 5. 7.(일) /  9일간

(변경) 2023. 4. 29.(토) ~ 5.10.(수) / 12일간

○ 휴장시설 : 장애인 목욕탕(대중탕, 가족탕)

※ 다목적체육관, 체력단련실 정상운영

○ 관련문의 : 여수시도시관리공단 장애인국민체육센터 ☎061)655-0888